Ежеквартальный отчет 
администрации Борского сельского поселения Тихвинского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения	
I.	Реализация мероприятий муниципальной программы	
1.	Ремонт участка дороги общего пользования от дома №7 до дома №10 д.Кайвакса					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня заключения соглашения на предоставление субсидии	Администрация Борского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ	Заключен муниципальный контракт 14.09.2016г. 
№ 03-399/16	
1.2.	Выполнение работ по ремонту дороги	В соответствии с муниципальным контрактом
	Подрядная организация	Благоустройство дорог сельских населенных пунктов Борского сельского поселения	Срок выполнения работ 13.10.2016г.	
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В соответствии с муниципальным контрактом
	Администрация Борского сельского поселения	Акт-приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Не выполнена	
2.	Ремонт участка дороги общего пользования от дома №3 до дома №6 д.Сарожа					
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня заключения соглашения на предоставление субсидии	Администрация Борского сельского поселения	Заключение муниципального контракта на выполнение работ	Заключен муниципальный контракт 14.09.2016г.
 № 03-400/16	
2.2.	Выполнение работ по ремонту дороги	В соответствии с муниципальным контрактом	Подрядная организация	Благоустройство дорог сельских населенных пунктов Борского сельского поселения	Срок выполнения работ 13.10.2016г.	
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	В соответствии с муниципальным контрактом	Администрация Борского сельского поселения	Акт-приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Не выполнена	
3.	Планировка территории детских площадок в д. Сарожа, д. Кайвакса, д. Дуброво					
3.1.	Заключение договора на выполнение работ по планировке территории трех детских площадок	Не позднее 1 месяца со дня заключения соглашения на предоставление субсидии	Администрация Борского сельского поселения	Планировка территории детских площадок в трех населенных пунктах	Заключены договора
01.06.2016г., 17.06.2016г.,
17.06.2016г	
3.2.	Выполнение работ по планировке территории детских площадок	В соответствии заключенным договором	ИП Мальков Н.Ф.	Благоустройство сельских населенных пунктов Борского сельского поселения	Работы выполнены 	
3.3.	Приемка объекта в порядке, установленном заключенным договором	В соответствии заключенным договором	Администрация Борского сельского поселения	Акт-приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	акт №27от 17.06.2016г.,
акт №29от  27.06.2016г. ,
акт №36 от 30.06.2016г.	
4.	Оборудование двух площадок под мусорные контейнеры в д.Кайвакса и д.Сарожа					
4.1.	Заключение договора на выполнение работ по оборудованию двух площадок под мусорные контейнеры	Не позднее 1 месяца со дня заключения соглашения на предоставление субсидии	Администрация Борского сельского поселения
	Оборудованию двух площадок под мусорные контейнеры в двух населенных пунктах	Заключены договора
01.06.2016г., 17.06.2016г.	
4.2.	Выполнение работ по оборудованию двух площадок под мусорные контейнеры	В соответствии заключенным договором	ИП Мальков Н.Ф.	Благоустройство сельских населенных пунктов Борского сельского поселения	Работы выполнены	
4.3.	Приемка объекта в порядке, установленном заключенным договором	В соответствии заключенным договором	Администрация Борского сельского поселения	Акт-приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	акт №28 от 17.06.2016г.,
акт №30 от  27.06.2016г. 	
5.	Очистка территории у домов №53,54 д.Кайвакса					
5.1.	Заключение договора на выполнение работ по очистке территории у двух домов 	Не позднее 1 месяца со дня заключения соглашения на предоставление субсидии	Администрация Борского сельского поселения	Очистка территории у двух домов	Заключен 
договор
26.05.2016г.	
5.2.	Выполнение работ по очистке территории у домов	В соответствии заключенным договором	ИП Мальков Н.Ф.	Благоустройство сельских населенных пунктов Борского сельского поселения	Работа выполнена	
5.3.	Приемка объекта в порядке, установленном заключенным договором	В соответствии заключенным договором	Администрация Борского сельского поселения	Акт-приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	акт №22 от 31.05.2016г.
	
6.	Ремонт колодца в д.Кайвакса					
6.1.	Заключение договора на выполнение работ по ремонту колодца	Не позднее 1 месяца со дня заключения соглашения на предоставление субсидии	Администрация Борского сельского поселения	Заключение муниципального контракта на выполнение работ	Договор заключен
17.06.2016г.	
6.2.	Выполнение работ по ремонту колодца	В соответствии заключенным договором	ИП Мальков Н.Ф.	Благоустройство сельских населенных пунктов Борского сельского поселения	Работы  выполнены	
6.3.	Приемка объекта в порядке, установленном заключенным договором	В соответствии заключенным договором	Администрация Борского сельского поселения	Акт-приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	акт №35 от 30.06.2016г.
	
7.	Ремонт пешеходного мостика в д.Кованщина					
7.1.	Заключение договора на выполнение работ по ремонту мостика	Не позднее 1 месяца со дня заключения соглашения на предоставление субсидии	Администрация Борского сельского поселения	Заключение муниципального контракта на выполнение работ	Договор заключен
23.09.2016г.	
7.2.	Выполнение работ по ремонту мостика	В соответствии заключенным договором	Подрядная организация	Благоустройство сельских населенных пунктов Борского сельского поселения	Срок выполнения работ 30.10.2016г.	
7.3.	Приемка объекта в порядке, установленном заключенным договором	В соответствии заключенным договором	Администрация Борского сельского поселения	Акт-приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Не выполнена	
8.	Приобретение уличных фонарей, фото-реле, зажимов для д.Владычно,Сарожа,Кривой Наволок,Черноваткино,Кайвакса					
8.1.	Заключение договора на приобретение уличных фонарей, фото-реле, зажимов для д.Владычно,Сарожа,Кривой Наволок,Черноваткино,Кайвакса	Не позднее 1 месяца со дня заключения соглашения на предоставление субсидии	Администрация Борского сельского поселения	Заключение договора	Договора заключены
27.06.2016г, 28.06.2016г.	
8.2.	Поставка уличных фонарей, фото-реле, зажимов для д.Владычно,Сарожа,Кривой Наволок,Черноваткино,Кайвакса	В соответствии с заключенным договором	ИП Осыкин В.П.	Благоустройство сельских населенных пунктов Борского сельского поселения	Товар поставлен
сч.ф №УТ-3334 от 19.07.2016г.,
сч.-ф»УТ-3332 от 19.07.2016г.	
II.	Контроль за реализацией муниципальной программы	
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 	
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течении периода действия муниципального контракта	Администрация Борского сельского поселения	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки	Выполнена не в полном объеме	
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 	Ежеквартально до 3 числа следующего за отчетным периодом	Администрация Борского сельского поселения	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению в комитетом	Выполнено	
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Борского сельского поселения	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не выполнена	

Глава администрации
Борского сельского поселения

__________/ Матвеев М.А./